PROPOSTA DI ACCORDO BONARIO 
DA PARTE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Art. 210 del Decreto Legislativo n. 36/2023)

COMUNE DI _________________
PROVINCIA DI _____________________

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Il sottoscritto ________________________, nella qualità di Responsabile Unico del Progetto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 210 del Decreto Legislativo n. 36/2023, 

premesso che:

-	con determina n. ________ del _________, a firma del Dirigente _____________________ sono stati affidati alla Ditta __________________ con sede in _______________________ i lavori di _________________________________________________________________;
-	il relativo contratto è stato sottoscritto in data _______ con il seguente n. di repertorio ____;
Considerata l’iscrizione di riserve sul registro di contabilità da parte della Ditta;
Valutato che, in ragione di detta iscrizione, l’importo dei lavori subirebbe incrementi sostanziali, in misura del ____ % dell’importo contrattuale;
Premesso che:
•	le riserve sono state iscritte entro i termini regolamentari nel registro di contabilità, in occasione dello stato avanzamento dei lavori n. ____ del ______ e n. ______ del _______;
•	che con l’ultima riserva sopra indicata, apposta sui documenti contabili in data __________ ed esplicitata in data ________________, l’importo complessivo delle stesse ha superato il limite del _____% dell’importo contrattuale dei lavori;
•	il sottoscritto ne ha valutato l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite del valore detto in precedenza;
•	con nota n. ____ del ________ sono state richieste al direttore dei lavori e al collaudatore tecnico-amministrativo le rispettive relazioni riservate, le quali sono pervenute rispettivamente in data ____ prot. _____ e in data _____ prot. ______, che vengono allegate alla presente;
•	è stata acquisita memoria dell’impresa esecutrice inviata con nota del _______, prot. ______ del ___________, che viene allegata alla presente;
•	è stato sentito l’appaltatore nel corso di un’audizione effettuata il _______________, le cui risultanze sono state riportate in apposito verbale che qui si allega;
Evidenziato che le richieste avanzate dalla Ditta sono le seguenti:
-	Riserva n. 1 - _______________________, importo di € ______________;	
-	Riserva n. 2 - _______________________, importo di € ______________;
Valutato l’importo complessivo dei maggiori compensi di € ___________;
Viste le seguenti osservazioni espresse dal direttore lavori nella sua relazione riservata in data ____:
Riserva n. 1 - _____________________________________________________________;
Riserva n. 2 - _____________________________________________________________;

Viste le proposte del Direttore dei lavori alla ditta per le relative quantificate in un importo complessivo di € _____________________;

Viste le seguenti osservazioni espresse dal collaudatore tecnico-amministrativo nella sua relazione riservata in data ____________________:
Riserva n. 1 - _____________________________________________________________;
Riserva n. 2 - _____________________________________________________________;

Viste le proposte del collaudatore tecnico-amministrativo alla ditta per le relative quantificate in un importo complessivo di € _____________________;

Esaminate le domande avanzate dalla Ditta;

Valutata la documentazione allegata;

formula la seguente proposta di accordo bonario

proponendo all’Ente la seguente soluzione per quanto attiene alle seguenti riserve:
-	Riserva n. 1 - di accoglierle limitatamente a complessivi € _______________, in quanto ___________________________________________________________________ (motivare); 
-	Riserva n. 2 - di accoglierle limitatamente a complessivi € _______________, in quanto ___________________________________________________________________ (motivare); 
Pertanto, la somma complessiva da offrire alla Ditta a tacitazione di ogni pretesa è di € _________.
Con la firma dell’accordo, la Ditta affidataria __________________ deve dichiarare esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà alla Ditta affidataria ________________ in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dall’accordo.

In ossequio a quanto previsto dall’art. 210, comma 6, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il sottoscritto evidenzia, altresì, che:
-	questa Amministrazione deve deliberare entro 45 giorni dalla data della seguente proposta con opportuno provvedimento motivato e darne sollecita comunicazione al sottoscritto e all’appaltatore affinché quest’ultimo possa assumere le sue decisioni;
-	se il pagamento di quanto pattuito avverrà oltre il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, saranno dovuti gli interessi al tasso legale;
-	l’accordo ha natura di transazione.

Si allega, oltre alla citata documentazione, lo schema dell’atto transattivo da sottoscrivere con la Ditta affidataria. 

Luogo e data ______________________
                   Il Responsabile Unico del Progetto

_______________________________________