COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI DI GRAVE INADEMPIMENTO

COMUNE DI __________________
PROVINCIA DI __________________________

Regione _____________________________________
Provincia di __________________________________
Comune di ___________________________________
Stazione appaltante____________________________
Lavori di: _______________________________________________________________________
Impresa: ________________________________________________________________________
Contratto in data _____________________  n. di rep. ____________________________ registrato a ___________________ il _________________ al n. _________
Importo contrattuale: ______________________
CIG______________; 
CUP ______________

Al Responsabile Unico del Progetto _______________________
Sede
Trasmessa a mezzo pec: __________________________

e, p.c.
All’Ente _______________________________
Alla Ditta _______________________________

Oggetto: Comunicazione di grave inadempimento nell’esecuzione dei lavori.

Con riferimento ai lavori epigrafati, nel mio ruolo di Direttore dei lavori espongo quanto segue.
A seguito di sopralluogo effettuato in data ___________________, ho riscontrato che i lavori presentavano notevole ritardo rispetto al cronoprogramma previsto e, conseguentemente, è stato redatto e sottoscritto il verbale di contestazione ed ho adottato e comunicato alla Ditta esecutrice dei lavori e al Responsabile Unico del Progetto in indirizzo apposito ordine di servizio, avente il n. ____ e la data _____________, con il quale ordinavo alla Ditta di procedere tempestivamente al recupero dei lavori e ad accelerare l’esecuzione di quelli in corso.
Successivamente, con visita effettuata presso il cantiere in data _____________, ho constatato che la Ditta esecutrice dei lavori non ha ottemperato all’ordine di servizio citato. Detta circostanza deve intendersi gravemente pregiudizievole della corretta realizzazione dei lavori e, secondo la comune esperienza, è estremamente improbabile che la Ditta riesca a recuperare il ritardo nell’esecuzione dei lavori, se non tramite pericolose accelerazioni che potrebbero compromettere l’esecuzione dell’opera a regola d’arte.
Tanto premesso, con la presente il sottoscritto invita la S.V. a valutare l’adozione delle necessarie determinazioni affinché i lavori possano procedere con la massima celerità ed essere eseguiti a regola d’arte e in ossequio alle previsioni contrattuali e del capitolato, nonché a valutare l’esistenza degli estremi per l’eventuale risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Distinti saluti.

Il Direttore dei lavori 

___________________