DETERMINA DIRIGENZIALE DI RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI PER GRAVE INADEMPIMENTO 
(Art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023)

COMUNE DI _________________
PROVINCIA DI _____________________

Prot. ______ del _____________

DETERMINA DIRIGENZIALE N. _____ DEL ____________

OGGETTO: Appalto di lavori per ________________________________ - CIG _____________ - Ditta affidataria _______________________ – Risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell’art. 122 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023) e dell’art. _______ del capitolato speciale di appalto

IL DIRIGENTE

Premesso che:
-	con determina n. ____ del _________ a firma del ____________________ si provvedeva all’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta ______________________, per un valore di € _____________________;
-	in data _____________ veniva sottoscritto il relativo contratto, avente il seguente numero di rep. ___________;
-	in data ____________ veniva effettuata la consegna dei lavori;
-	i lavori hanno avuto inizio in data _________________ e si sarebbero dovuti concludere entro il giorno ___________________;
-	(eventuale) in data _________________, a seguito di motivata istanza della ditta, è stata concessa una proroga di _____ giorni, con conseguente individuazione della nuova consegna dei lavori per il giorno _____________;
-	in data _________________ si sono conclusi i lavori, come da verbale di fine lavori redatto dal Direttore dei lavori _________________;
Rilevato che: 
•	in occasione della visita di constatazione effettuata in data ______________ si rilevavano i seguenti difetti di costruzione: ________________________;
•	conseguentemente, si concordava la necessità di rimediarvi con i seguenti interventi _______________________________________________ entro il termine di ______ giorni;

Considerato che il Direttore dei lavori, in diverse occasioni, come si evince dalla sua relazione particolareggiata redatta in data _____________, verificava l’inerzia della ditta nell’esecuzione degli interventi previsti e ne sollecitava, a più riprese, l’esecuzione stessa;

Dato atto che:
•	il Direttore dei lavori ha adottato i conseguenti ordini di servizio, aventi i seguenti estremi _________________________________________________________________________;
•	da ultimo, con la relazione particolareggiata redatta in data ______________ comunicava che nessuno dei lavori previsti per rimediare ai difetti di costruzione era stato effettuato, che il comportamento della Ditta doveva qualificarsi in termini di grave inadempimento contrattuale, proponendo di conseguenza la risoluzione del contratto nei riguardi della ditta appaltatrice per grave inadempimento, grave errore e grave ritardo;

Ritenuto che la valutazione del Direttore dei lavori in merito alla condotta della Ditta sia effettivamente qualificabile in termini di grave inadempimento, non essendo stati effettuati i lavori previsti per rimediare ai difetti di costruzione rilevati e che le opere realizzate, in difetto di tali rimedi, non possono considerarsi effettuati a regola d’arte né rispettosi di quanto previsto nel contratto e nel capitolato speciale;

Vista la proposta di risoluzione del contratto a firma del Responsabile Unico del Progetto per grave inadempimento, grave errore e grave ritardo ex art. 122 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023), pervenuta in data ________________;

Ritenuta, perciò, condivisibile la proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave errore e grave ritardo, ex art. 122 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023), in quanto ricorrono i presupposti e le condizioni previste dalla citata disposizione, alla luce di quanto espresso nei punti precedenti;

Viste: 
•	la relazione del Direttore dei Lavori e relativi allegati, unita alla presente quale parte integrante e sostanziale;
•	la proposta di risoluzione del contratto formulata dal Responsabile Unico del Procedimento;

Visti:
•	il Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023);
•	il Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1)	di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2)	di risolvere in danno della Ditta _____________________, per i motivi dedotti in narrativa, per grave inadempimento, grave errore e grave ritardo, il contratto di appalto rep n. ______ sottoscritto in data __________, per l’esecuzione dei lavori di _______________________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023);
3)	di dare mandato al Responsabile Unico del Progetto ed al Direttore dei Lavori di attivare tutte le iniziative necessarie e previste dalla vigente normativa per liberare l’area di cantiere e di recuperare dalla ditta appaltatrice i danni subiti con incameramento delle polizze fidejussorie;
4)	di disporre di attivare apposita procedura di gara per affidare ad altro operatore economico l’esecuzione dei lavori necessari a riparare i difetti di costruzione riscontrati ponendo a carico della ditta ________________________________________________ i relativi costi;
5)	di riservarsi di quantificare gli ulteriori danni conseguenti e riconnessi all’inadempimento della ditta appaltatrice;
6)	di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ________________________________;
7)	di dare mandato al Responsabile Unico del Progetto di procedere alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
8)	di procedere alla pubblicazione secondo le forme e i termini di legge.

Luogo e data ________________________					Firma del Dirigente
										__________________